정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

국가기상위성센터/위성운영과

②담당자

(전화번호)

위성운영과장 연혁진

(070-7850-5157)

기상사무관 신동기

(070-7850-5754)

③정책사업명

정지궤도 기상위성 지상국 개발

④선정기준

일정규모 이상의 연구용역

⑤사업기간

2014-2019

⑥주요내용

○ 목적

- `18년 상반기 발사 예정인 천리안 후속 정지궤도 기상위성의 국가기상위성센터 지상국 시스템을 개발 및 구축

○ 연구개발 기간 : 2014.7 ~ 2019.5

○ 총사업비 : 5년간 총 911억원

(단위: 백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019
예산	2,780	15,000	36,537	16,503	12,740	7,540

※`17년~`19년: 예정액

○ 연구기관 : 한국전자통신연구원(ETRI, 주관), 한국항공우주연구원, 한국천문연구원

○ 주요내용

- 기상 및 우주기상 자료 수신처리 시스템 개발․구축

- 정지궤도 기상위성 (부)관제시스템 구축

- 기상위성 자료 관리 및 서비스 시스템 개발․구축

- 기상 및 우주기상 자료처리 알고리즘 개발

- 기상위성 자료 활용기술 개발

- 지상국 개발 사업관리 및 감리

○ 추진경과

- '07 : 정지궤도 복합위성 기상관측시스템 개발을 위한 기획연구

- ‘09. 9월 : 우주기상업무 기본계획 수립을 위한 기획연구

- ‘10. 11월 : 독자기상위성 자료처리 및 활용기술 개발 기획연구

- ‘11. 11월 : 정지궤도 기상위성 자료처리 기술개발 선행연구

- ‘11. 12월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기획연구

- ‘12. 8월 : 정지궤도 복합위성 기상탑재체 개발사업 착수

- ‘12. 11월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구

- ‘13. 2월 : 지상국 개발 예비타당성 조사 통과

(AHP 0.716 / 기간 ‘14~’18 / 예산 913억원)

- ‘13. 6~7월 : 지상국 개발 계획 부처 및 기관 의견조회

- ‘13. 7월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 계획 수립

- ‘14. 1~2월 : 지상국 제안요청서 전문가 검토 및 자문회의

- ‘14. 4월 : 기상위성 개발에 관한 처리규정 제정

(국가기상위성센터 훈령 제22호)

- ‘14. 4월 : 지상국 개발위원회 구성 및 제안요청서 심의

- ‘14. 5~6월 : 지상국 개발 주관연구기관 공모 및 선정

- ‘14. 7월 : 지상국 개발 R&D 과제 협약 체결 - ETRI

- '14. 9월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 착수보고

- ‘14. 11월 : 지상국 개발 감리 용역사업 계약 체결

(한국정보기술단 / 기간 ‘14.11~’19.6 / 12.4억원)

- ‘14. 12월 : 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

- ‘15. 1월 : 시스템 요구사항 검토 후속회의(delta-SRR)

- '15. 3월 : 자료처리 알고리즘 1차년도 개발결과 최종보고

- ‘15. 4월 : 활용기술 선행연구 결과 최종보고

- ‘15. 4월 : 우주기상 자료처리 1차년도 개발결과 최종보고

- ‘15. 4월 : 시스템 개념설계 검토회의(SDR) 및 평가

- '15. 4월 : 지상국 개발 1차년도 연차평가

- `15. 5월 : 지상국 개발 과제 2차년도 협약

(한국전자통신연구원/기간 15.5.1~`16.2.29/145.5억원)

- `15. 6월 : 기상요소 알고리즘 개발 용역 착수보고회 개최

- `15. 6월 : 후속 지상국 시스템 설계방향 점검회의 개최

- `15. 8월 : 활용 및 분석기술 개발 용역 착수보고회 개최

- `15. 8월 : 공통테스트베드 web open

- `15.11월 : 제1차 기상청 국제 기상위성 컨퍼런스 개최

(더팔래스호텔 서울/11.16~11.18/국내외 기상위성 관련자)

- `15.12월 : 지상국 개발 예비설계 검토회의(PDR)

- `15.12월 : 자료처리 알고리즘 23종 원형 알고리즘 개발

- `16. 1월 : 예비설계 완료를 위한 집중토론회 개최

- '16. 1월 : 자료처리 알고리즘 2차년도 개발결과 최종보고

- ‘16. 1월 : 활용기술 1차년도 개발결과 최종보고

- `16. 3월 : 지상국 개발 과제 3차년도 협약

(한국전자통신연구원/기간 16.3.1~`17.2.28/361.57억원)