『국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업』

설계용역(기본·실시) 과업지시서

2019. 11.

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	7

3. 관급자재의 선정	9

4. 보안성 검토	9

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	10

2. 설계 일반 지침	11

3. 설계진행 시 유의사항	15

4. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	16

5. 설계도서의 분리작성	17

6. 설계도서 표기	17

7. 도면작성	18

제4장 기본 및 실시설계 작성지침

1. 기본설계의 범위	19

2. 기본설계도서 작성	19

3. 기본설계 작성 시 검토사항	19

4. 실시설계의 범위	21
5. 실시설계도서 작성	21

6. 설계설명서	22

7. 시방서	23

8. 설계도면	23

9. 설계 내역서	23

10. 성과품 제출(공통)	24

11. 기타	24

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계의 도서	25

2. 중간설계의 도서	25

3. 실시설계의 도서	28

〔붙임 1〕 보안서약서/확약서	32

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	36

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	37

〔붙임 4〕 (계획, 실시)설계 검사원	39

〔붙임 5〕 주간공정보고	40

〔붙임 6〕 월간공정보고	41

〔붙임 7〕 대리인 위임장	42

제1장  총 칙

1. 과업의 명칭: 『국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축』설계(기본·실시) 용역

2. 과업의 개요

가. 위치: 서울특별시 동작구 여의대방로 16길(신대방동 일반 460-18)

나. 부지면적: 18,198㎡

다. 증축규모

1) 건축연면적: 4,533㎡(-5%범위), 지하 1층 지상 3층

2) 건폐율/용적율: 법정 건폐율/용적율 이하

3) 용도: (공공)업무시설, 노유자시설

※ 참고 : 기존 청사규모 현황 및 증축건축물 개요(대장 확인필요)

구분	부지면적		건축면적 (건폐율)	연면적 (용적률)	조경면적	공개공지	층수
법정 규모	18,196㎡		10,917.6㎡ (60%)	36,392㎡ (200%)	대지면적의 15%(3,063㎡) 이상	건축연면적 10,000㎡ 초과 시 대지면적의 7% 이상(1,429㎡)
계획 규모	기존	18,192㎡	3,766.59㎡ (20.07%)	20,388.96㎡ (용적율 산정용 15,254㎡) (83.82%)	3,540㎡	1,447㎡	지상 8층
	증축	18,192㎡	1,080㎡ (5.94%)	4,533㎡ (용적율 산정용 2,717㎡) (14.93%)	3,540㎡ (옥상조경 조성으로 규모축소 예정)	1,447㎡	지상 3층
관련 법규	-		‘시·군구 지구단위계획’	‘시·군구 지구단위계획’	「서울시 건축 조례」	「서울시 건축 조례」

라. 추정공사비(예산액): 12,131,000천원(VAT포함)

1) 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신(일반), 소방, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 공사비에 포함하여야 한다.

2) 제시된 공사비는 예보시스템 및 특수설비 설치공사(정보통신), 시설 내, 실내조경, 어린이집 인테리어공사, 인테리어 집기설치 등은 포함되지 않는다.

3) 낙찰차액을 감안하여 추정공사비를 초과하여 설계해서는 안된다.

※ 시설비 예산액은 발주처에 사정 및 사업 추진과정에서 변경될 수 있으며, 해당 과업에 반영하여야 한다.

마. 과업기간: 착수일로부터 300일

1) 발주기관의 사정에 의하여 용역기간이 지연될 경우 수급인은 발주기관의 용역일정 조정요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

라) 용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 기본설계, 실시설계로 구성된다.

— 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의를 포함한 인허가 처리 등 행정절차를 수행한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원(각종 서류 및 도면 작성 등)

다. 측량 및 지질 조사(NX 2공) 실시(지질조사서 제출 포함)

※ NX 2공 비용은 설계비에 포함됨, 측량비용은 발주기관에서 별도 지급

라. 아래와 같은 업무를 수행한다.

※ 에너지절약계획서 수립

※ 건축물에너지효율 등급 1등급(인증비용 설계비에 포함)

※ 제로에너지건축물 등급

※ 친환경건축물인증등급 최우수(인증비용 설계비에 포함)

※ BF인증(관련비용은 발주기관에서 별도 지급/증축사업 제외 시 미시행)

등 본 사업 수행과 연관되는 사항 일체

마. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

바. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

사. 본 설계과업에는 기존 전산실에서 증축 시 예보시스템이 설치(추후 공사)되는 부분까지의 기본통신망 구축공사가 포함된다.

아, 본 시설물은 기상관측시설로 수급인은 기상관측장비 업체와의 원활한 업무협의 및 요청사항이 설계에 적극 반영될 수 있도록 한다.

차. 인․허가 업무(추후 실시사항)

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 하며, 기본비용은 설계비 내에서 진행한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 각종 영향평가를 실시할 경우 수급인은 평가대행업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다.

4) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
3층	대변인실	18명 × 7.33㎡	132	2.91
	언론(통합)브리핑실(업무시설)	100명 × 2.63㎡	263	5.80	기존 수요반영
	리포터실(업무시설)	15명 × 5.33㎡	80	1.76	기존수요축소반영
	기자대기실(업무시설)	10명 × 3㎡	30	0.66	기존수요축소반영
	공용공간(홀, 화장실, 계단실, E/V 등)		120	2.65	최소화
	소계		625	13.79
2층	통합현업실(휴게, 전산실 포함)(업무시설)	상근 60석, 주 및 보조 회의공간 35석 이상	720	15.88	기존 수요확대
	통합방송실(업무시설)	방송실, 조정실 등 수요	120	2.65	기존 수요반영
	지원사무실(업무시설)	10명 × 6㎡	60	1.32	기존 수요반영
	공용공간(홀, 화장실, 계단실, E/V 등)		180	3.97	최소화
	소계		1,080	23.82
1층	직장어린이집(노유자 시설)	56명 × 8.25㎡	462	10.19
	공용공간(홀, 화장실, 계단실, E/V 등)		100	2.21	최소화
	소계		562	12.40
지하 1층	지하주차장	50대 × 36.32㎡	1,816	40.06	최대확보
	기계․전기실, 창고 등(공용공간)		350	7.72
	홀, 화장실, 계단실, E/V 등		100	2.21
	소계		2,266	49.99
합 계			4,533	100

타. 기본설계 시 다음의 층별 공간구성(SPACE PROGRAM)을 참조하고, 결정 시, 발주기관과 협의하여 설계업무를 수행한다.

※ 면적 배분 시 (지하)주차장면적 1,916㎡(주차장+홀, 화장실, 계단실 등/ 청사수급 시 주차장면적으로 확정)은 반드시 준수

대상연령	만0세	만1세	만2세	만3세	만4세	만5세
`18년 직장어린이집 사용 대상자(0~5세 자녀 보유)	6명	12명	24명	15명	12명	10명
자녀수 `18년 수요조사 시 어린이집 사용 희망자	1명	9명	15명	7명	5명	4명
보육교원 수	총 7명 : 원장 1명(업무총괄), 보육교사 6명(교대근무 고려)
교사 대 아동비율 (권장사항)	1:3	1:5	1:7	1:15	1:20	1:20

용도별	시설명	추가 소요면적	산출근거	비고
보육공간	보육실, 유희실, 화장실	235㎡	4.80㎡ × 49명	`18년 수요조사 결과 최대 49명으로 산정
관리공간	원장실, 보육교사실, 보건실, 교재실	62㎡	8.90㎡ × 7명	산출자료
서비스 공간	조리실, 식당, 부모대기공간	50㎡
전용공간	소 계	347㎡
공용공간	현관, 세탁실, 창고, 보일러실 등	115㎡	공용면적 비율(25%)
합계		462㎡

※ 참고 : 직장어린이집 소요면적 현황 및 보육교사 수 산출

카. 설계주안점 : 제안공모 지침서 참조

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 3SET를 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 관련 서류를 포함한 USB

13) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 수급인은 기본설계 심사일(승인된 예정공정표 기본단계 심사일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 기본단계 심사(계획대안검토) 체크리스트 작성제출

- 기본설계 심사 체크리스트 주요내용 안내

가) 관련법규검토

나) 배치, 평면안 검토

다) 구조공법 검토

라) 설비공법 검토

마) 현장조사의 적정성 검토

바) 발주기관 요구 적용 여부

2) 관련법규 검토서

3) 배치, 평면, 입면안 3개 대안을 포함한 설계도면

4) 발주기관 요구사항 반영 도면

5) 관련서류를 포함한 USB

6) 예산대비 사업비 현황을 파악하기 위해 발주기관의 요청 시 개산내역을 작성하여 제출

라. 계획설계도서 납품(체크리스트 검토결과 반영)

1) 각 제출도서는 3개 대안별 구분하여 제출

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련법규 검토서

4) 현장조사 결과보고서

5) 현황측량 성과도

6) 유사시설 견학보고서

7) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

8) 지질조사보고서, 현황측량보고서

마. 수급인은 실시설계단계 심사일(예정공정표 심사일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 실시설계 심사체크리스트 작성제출

- 실시설계 심사 체크리스트 주요내용

가) 설계설명서 검토(분야별)

나) 실시설계납품도서

다) 실시설계도면 검토

라) 발주용 내역서 검토

마) 공사시방서 검토

바) 구조계산서 검토

사) 물량산출서 검토

아) 단가산출, 견적서 검토

자) 분야별 크로스 체크

2) 내역서(원가 제비율)

3) 인허가용 설계도면

4) 계산서 및 물량산출서

5) 단가산출서, 견적서

6) 관련서류를 포함한 USB

자. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 5]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

차. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

가) 주간공정보고 [붙임 6]

나) 월간공정보고 [붙임 7]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야한다≫

가. 업무보고

1) 주간공정보고

- 매주 금요일에 붙임 양식에 따라 제출한다.

2) 월간공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

- 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시  마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고   보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

6) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

7) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

다. 업무수행

1) 최적의 시설물 구축을 위하여 본 설계용역을 수행하면서 기존 국내외 현업시설 및 어린이집시설 등의 3~4개의 추천 사례를 조사하고 기상청 실무추진단과 협의하에 본 설계용역에 반영한다.

2) 본 과업과 관련된 부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

2) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

3) ‘조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 제2019-1867호)’

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

4. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 기본설계, 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

4) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

사. 본 건물은 기상청을 대표하는 현업시설물로 기상청이 추구하는 미래의 방향성을 조형성, 창조성, 심미성 등을 고려하여 청사의 외관 및 내부 디자인에 반영하여야 한다.

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

5) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

차. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

카. 방범, 방재 보안 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 본 청사는 국가중요시설 `나`급으로 관련규정에 의거 철저한 보안대책등을 마련한다.

2) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

3) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

파. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요) : 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

너. 변경 및 정산

1) 발주청이 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때는 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며 발주청의 방침에 따라야 한다.

2) 시공 중 부득이한 설계변경(구조변경, 공법변경, 시공 불가능 발생, 설비 시공 불가능 등)이 수반될 경우 건축사는 대안 등 검토의견을 제출한다.

3) 본 용역 과업비는 추정공사비에 의한 것이므로 설계 완료 후 공사금액이 감소될 경우 정산 감액 조치한다.

더. 설계상의 하자의 책임

1) 용역자가 설계의 잘못으로 공사 또는 공사 후에라도 다음과 같은 중대하자 사항이 발생하였을 경우에는 민·형사상의 책임은 물론 손해를 배상하여야 한다.

가) 구조 및 기능상 중요하자가 발생하였을 경우

나) 기술상 중대한 결함으로 인해 경제적 손실 및 공사 진행에 지장이 초래 되었을 경우 등

러. 손해배상공제 가입

1) 건축사가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 건축주에게 재산상의 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상하기 위해 건축사법 제20조 규정에 따라 손해배상책임을 보장하기 위해 공제에 가입하여야 한다.

2) 건축사는 계약체결 시 공제증서를 제출하여야 한다.

머. 기 타

1) 각종 관련법규에 의거 인·허가 및 심의를 득하여야 하고 제반절차(대행) 이행하여 이에 따른 보완사항이 있을시 보완하여 인허가 등 승인을 득할 수 있도록 하여야 한다.(예시 : 경관심의, 미관심의, 건축, 전기, 소방, 통신, 도로점용, 가스, 상하수도, 오배수, 가설건축 등)

2) 본 과업지시서에 정하지 않았거나 누락된 부분에 대하여는 발주청과 협의하여 결정하고 기타 경미한 사항은 용역자 부담으로 하며 기타 발주청의 해석에 따른다.

3) 감독관이 과업 수행 중 하도급자나 연계고용인이 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 즉시 교체요구를 할 수 있으며, 용역자는 이에 응하여야 한다.

3. 설계진행 시 유의사항

가. 지질조사 공수는 NX 2공이며, 사전에 위치 선정 등 지질조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다. (지질조사 후 결과보고서 제출)

나. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/공사기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

다. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 실에 대해서는 인테리어 설계에 대한 계획/실시설계 단계별로 발주기관에서 보고회를 개최하고 승인을 받아야 한다.

- 인테리어 설계가 필요한 실 : 발주기관과 협의하여 시행

라. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

마. 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

바. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

사. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

아. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

차. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

타. 수급인은「건설현장 축중기 설치지침 (국토교통부 훈령 제757호)」에 따라 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

파. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

하. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

거. 본 사업을 수행하면서 예산활용 등의 사유로 발주처가 개산내역 등을 요구하면 이에 대하여 성실히 조치를 취하여야 한다.

4. 단계별 보고회의 지정 및 제출도서의 승인

가. 착수보고회(기본계획)

1) 기본계획 설계는 착수계 제출 후 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

2) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

나. 중간보고회(기본계획 및 실시설계 단계 각 1회, 발주기관 요구로 추가될 수 있음)

1) 계약상대자는 설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전협의 및 승인 후 보고회를 개최한다.

2) 계약상대자는 보고회 시 나온 발주기관의 요청을 설계안에 반드시 반영하여야 하며, 수시로 결과를 발주기관에 보고한다.

다. 최종보고회(기본계획 및 실시설계 단계 각 1회)

1) 계약상대자는 설계(안)이 완료되기 10일 전까지 발주기관의 승인 후 완료보고회를 실시한다.

라. 기타회의

1) 발주처의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 계약상대자는 발주처의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련자료를 작성, 제출하여야 한다.

2) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주처에서 별도 통보할 수 있다.

마. 업무보고 및 회의내용 기록

1) 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주처에 제출하여야 한다.

5. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

7. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제4장 기본 및 실시설계 작성지침

1. 기본설계의 범위

1) “기본설계”라 함은 기본계획 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서 발주청으로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

2) 발주청에서 기본 및 실시설계 기간 동안 보고회 및 위원회 등을 개최할 경우에는 요구된 결과 사항에 대하여 발주청의 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 하며, 기본설계용역 보고회시에는 필요한 일체의 자료를 준비하여야 한다.

- 기본설계(안)에 대하여 보고회 개최 시 채택된 설계안에 대하여 실시설계에 반영․수행한다.

2. 기본설계도서 작성

1) 계약자는 3가지 이상의 기본설계“안”을 제출하여 발주청이 선택할 수 있도록 하여야 한다.

2) 기본설계“안”에는 다음사항이 표기되어야 한다.

- 기본설계(1.2.3안) 설명자료, 위치도, 설계개요, 배치도(1.2.3안), 평면도(1.2.3안),정면 입면도(1.2.3안), 기타 감독자 요구사항, 장단점 등

- 각 안별로 추정 개략공사비 산출 및 관계법규 분석을 포함한다.

3. 기본계획 작성 시 검토사항

1) 관계법규 등 사전조사

- 설계용역자는 본 설계와 관련한 제반 법규에 적합하게 설계하여야 하며 면밀한 사전조사 후 설계에 반드시 반영하여야 한다.

가. 대지의 여건조사

(1) 지형조사

(2) 교통현황조사

(3) 도시계획 관련조사(토지이용현황, 주변개발계획)

(4) 하수도 및 오수관계 조사

(5) 상수도 인입 및 급수량 조사

(6) 지하 매설물 조사

(7) 도시가스 인입 조사

(8) 전기인입 및 용량조사

(9) 대지 내 및 대지 주변 구조물(시설물) 조사

나. 지반조사

(1) 지반조사 시 인근지역의 기존 지반조사 자료를 포함한 사전 개략조사를 통하여 지반특성을 예비적으로 평가, 지반조사 계획에 활용한다.

(2) 시추간격 및 조사 위치는 감독관 승인을 득하여 시행한다.

(3) 지반조사(보링) 수량의 경우 5공 이상으로 하며 증, 감이 필요할 경우 발주처와 협의하여야 한다.

(4) 시추심도 30m이상 및 시추공 2개소 이상에 대해 하향식 탄성파 탐사(다운홀 등)를 실시하고 구조물의 내진설계에 반영하여야 한다.

(5) 지반조사 보고서에는 표준관입시험, 탄성파 탐사결과, 지반조건(KBC 2016적용), 지하수위 측정 등이 명기되어야 한다.

(6) 시추심도는 풍화암 5m이상 혹은 연암 2m 이상, 계획 지하구조물 깊이 이상으로 한다.

(7) 시추조사 결과 지하구조물 계획에 영향을 줄 정도로 지반변동이 심하다고 판정될 경우 발주부서와 협의하여 추가 보링조사 및 탄성파 탐사를 실시하여야 한다.

(8) 시추공으로 인한 지하수의 오염물질 유입 등의 발생요인이 있을 경우에는 폐공 되메우기 등 조치를 하여야 한다.

(9) 흙막이 가시설이 필요할 경우 지반조사를 흙막이 외부에도 시행(검토)한다.

(10) 현장여건에 적합한 가시설 공법적용하여 설계할 것.

다. 현황측량

(1) 기준점 및 수준점은 공공측량의 작업규정에 의해 시행한다.

(2) 도근점 위치는 향후 공사 시 확인할 수 있는 위치에 설치하며 야장에 기록하여 훼손 시 복원될 수 있도록 하여야 한다.

라. 공사용 가설동력 및 통신현황 조사

마. 잔토처리 및 성토 시 반입 토취장 관계 확인 등

바. 공사중 교통처리계획도 수립, 보행동선 및 자전거도로 검토, 교통약자 배려 검토

2) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

3) 유사 사례 조사

4) 관계법령 조사

5) 관련 기관 또는 부서와의 협의

4 실시설계의 범위

실시설계는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 붙임 4호 서식에 준하여 설계도서를 작성하며 발주청 및 관련기관의 건축협의 등을 거쳐 최종 확정하여야 한다.

5. 실시설계도서 작성

가. 건축분야

(1) 건축법 및 관계 법령기준

(2) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

(3) 설계 용역자는 위 조사내용을 숙지하여 본 과업 내용이 적법하도록 하여야 하며 성과품 납품 시 또는 납품 후에라도 잘못된 사항이나 보완사항이 발견 되었을 때에는 이를 숙지하지 않은 책임이 설계 용역자에게 있으며 즉시 보완 수정 하여야 한다.

나. 토목분야

(1) 설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량에 관한 조사 후 경제성, 시공성, 수명 등을 고려하여 두께를 결정 설계하여야 한다.

(2) 지질조사에 따라 흙막이 등 명확하게 상세 설계 시공되도록 하여야 한다.

다. 조경분야

(1) 토질의 성격과 주변 환경에 맞는 생산적이고 경제적인 향토수종을 선정, 조경의 토착화를 도모하여야 한다.

(2) 구조물은 경관과 구조물간의 상호 유기적 연관성을 갖도록 한다.

라. 기계분야

(1) 각종 시설물은 유지관리가 용이하게 시공되도록 설계하여야 한다.

(2) 고효율에너지 기자재를 도입 반영하여 설계한다.

(3) 기계분야, 환경관계법령 및 기타 법령에 위배됨이 없이 설계한다.

마. 전기분야

(1) 전기공사업법 및 전기사업법 규정에 적합하게 설계한다.

(2) 설계기준은 전기설비기술기준, 내선규정, 전기관계법규 및 관련소방 법규를

준수 충족하여야 한다.

(3) 각 분야별, 분기회로별 총 부하 용량계산 및 냉․난방․공조․환기 등 설비부하             및 기타 전원(향후 증설) 등을 고려하여 동력전원 및 부하설비를 계산 설계한다.

바. 통신분야

(1) 국선 및 내선의 회선, 케이블 규격선정 및 인입선 고려설계

(2) 행정 전산망 구성 및 각종 정보 통신망 구축 및 최신의 첨단장비로 구성되는 데이터 통신설비 설계

(3) 향후 증설이 용이하도록 설계

사. 소방분야

(1) 소방법 등 관련법 규정에 적합하게 설계

(2) 자동화재 탐지설비 등 유지관리 및 소화활동에 맞는 시설 확보

아. 공통사항

(1) 천장 및 소방, 방송설비로 보강을 요할시 설계에 반영

(2) 각 설계도는 더 이상 세부설계가 필요 없도록 최대한 상세히 표현 되도록

완벽하게 설계하고 주요부분은 시공에 필요한 시공 상세도 작성

(3) 각 설계도서는 분야별로 구분 작성하되 건축사 책임아래 상호 긴밀한 협조체계로

각종 장비 등 설치에 필요한 층고, 천정고, 배치관계 등을 종합적으로 고려하여

분야별 시공시 설계상 하자가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 장애인의 이용에 지장이 없도록 관계규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

(5) 주요 자재, 특허․신기술 공법, 장비 사용성 검토 등을 비교분석하여 사전에 발주청과 협의 지침확정 후 설계에 반영하여야 한다.

6. 설계 설명서

가. 설계 설명서는 본 과업의 전체를 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.

- 개요, 구조 및 면적, 부대시설, 공정표, 기타 필요한 시설

나. 설계 설명서에는 조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

다. 각 설명서는 공사별분야 이외의 사항도 표기하도록 하여야 한다.

라. 세부시설 설명서는 시설별로 현장 단위로 시설개요, 면적, 규모, 층고, 일반시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 실의 용도, 기능, 설치 목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편하도록 기준이 되는 근거와 안내가 되도록 작성한다.

7. 시방서

가. 일반시방서

건설공사 표준시방서에 기준하여 각 공종별로 상세하게 기술하여야 한다.

나. 특기시방서

(1) 주요자재에 대한 사항

(2) 공법에 관한 사항

(3) 기타 주의를 요하는 사항 등

8. 설계 도면

가. 건축 설계도서는 KSA0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

나. 과업 시설물의 설계도서는 공종별 발주, 구분별로 편철하여 목록표, 배치도,

구적도, 평면도, 단면도 등의 순으로 작성한다.

다. 도면 제작 중 중복이 있을 시는 단일화 할 수 있으며 동일 도면에 표시할 수 있다.

라. 도면 규격과 설계도 축적이 맞지 않을 경우에는 일부 축척을 변경할 수 있다.

마. 필요한 도서 등은 발주기관에서 요구할 수 있다.

9. 설계 내역서

가. 공사비 원가계산은 회계예규(원가계산에 의한 예정가격작성준칙) 공사원가 계산

방식에 의거 작성한다.

나. 공사비 적산은 정부 표준품셈, 정부발표 노임단가 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

(1) 재료 단가 조사

(가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

(나) 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 기획재정부에 등록한 기관(대한건설협회,한국물가협회,한국물가정보센터등)의 물가자료 책자등과 직접 시장조사 된 3개 이상의 견적 등에 의한다.

(다) 공사자재 및 자재단가 결정은 거래 실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재

단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의

운반비를 계상 할 수 있다.

(라) 사용자재는 국내 생산품 중 KS품목 및 최고품 사용을 원칙으로 한다.

(2) 수량산출

(가) 수량 산출은 공사비의 효율적인 운용을 기하도록 한다.

(나) 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 작성 산정한다

10. 성과품 제출(공통)

연번	설 계 도 서	규 격	수 량	비 고
1	설계도면	A4 (A3반책, 백도) A3 (A3평철, 백도)	각 8부 각 8부	각분야별로 작성
2	분야별 합본 (내역서, 설명서, 시방서, 계산서, 도면 등)	A4	각 5부
3	설계설명서	A4	각 8부
4	지질조사보고서	A4	5 부
5	전단파속도시험 보고서	A4	5 부
6	공사시방서	A4	각 8부
7	내역서 (내역서,일위대가표,수량산출조서,단가산출조서 등 )	A4	각 8부
8	구조계산서(해당시)	A4	각 3부
9	각종 설계계산서(해당시)	A4	각 3부
10	공사예정공정표	A3	8부
11	조감도(투시도)	900 × 700(칼라, 액자)	1점
12	공사판넬 (조감도+위치도+설계개요+배치도+평면도)	A2(A3 반책)	1부
13	건축협의용 도서 및 각종 신고 협의도서 (예:각종 도서, 에너지절약계획서 등)	세움터 적용	소요량
14	관급자재 발주용 설계도서		소요량
15	설계도서 일체 USB 또는 CD		2개

※ 납품완료후 원가심사 및 일상감사에서 변동사항이 있을시 변동분은 재납품하여야 한다.

※ 발주청과 수급인 협의 후 위의 내용은 조정될 수 있다.

※ 상기 설계도서는 분야별[건축(토목, 기계, 조경 포함), 전기, 통신, 소방]으로 작성

11. 기   타

- 건축협의 관련서류를 작성하고 협의에 협조하여야 한다.

- 관계부서 협의 및 주민설명회, 경관심의 등으로 의견을 수렴하는 경우 그 결과를

검토하여 설계에 반영하여야 한다.

- 기타 과업지시서 및 계약조건에 없는 사항은 발주처의 지시에 따른다.

제5장 설계도서 납품목록

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

(공공발주사업의 건축사의 업무범위와 대가기준에 의거 발주청과 협의 후 제출)

① 계획설계의 도서

종 류		내 용
건축	공사비 개산서	재료․장비선정에 따른 개략 공사비
	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악
		설계구상안
	건축계획서	설계개요
		배치계획
		평면계획
		입면계획
		단면계획
	건축 도면	배치도
		대지 종․횡단면도
		각층 평면도
		입면도(2면 이상)
		단면도(종․횡단면도)
	심의 도서	심의대상인 경우
구조	구조계획서	구조계획개요
기계	기계설비 계획서	건축주 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정
		기계설비 계획개요
전기	전기설비 계획서	해당 법규 검토
		설계방향 설정, 전기설비계획개요
토목	토목계획서	우․오수처리계획서와 상수계획서
조경	조경계획서	식재 계획도

② 중간설계의 도서

가) 건 축

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	공사용 시방서(초안)
	공사비 개산서	기본설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성
	건축 계획서	공사개요(위치, 대지면적등)
		건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등)
		건축물 용도별 면적, 주차장규모
	법규 검토서	관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성
	안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구적도	대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표	바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배치도	축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계
	주차 계획도	법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
		옥외 및 지하 주차장 도면
	각층 및 지붕 평면도	기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치
		방화 구획 및 방화벽의 위치
	입면도(2면 이상)	주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료
	단면도(종․횡단면도)	건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이
		천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현
	투시도	투시도 또는 조감도

종 류			내 용
상세 도	수직 동선 상세도	계단평면․단면상세도
	부분 상세도	지상층 외벽 평․입․단면도
		지하층 부분 단면상세도
기타	정화조	정화조 평면․단면도
		용량 계산서

나) 구 조

종 류		내 용
일반 사항	구조 계산서
	설계 설명서
도면	기초 일람표
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성
	기둥 일람표
	보 일람표
	슬래브 일람표
	옹벽 일람표
	계단배근 일람표
	주심도

다) 기 계

종 류		내 용
일반사항	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확정
	소방시설 계획서	건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
도면	도면 목록표
	소방 설비도	해당 소방관련 설비
	장비 배치도	기계실, 공조실등의 장비배치방안 계획
	계통도	공조배관설비 계통도
		DUCT설비 계통도
		위생설비 계통도
		소화 설비 계통도
	기준층 및 주요층 기구 평면도	소화 설비 평면도
	저수조 및 고가수조	저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시
	도시가스 인입 확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사, 확인
	기구 상세도	기구의 선정

라) 전 기

종 류		내 용
일반 사항	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확장
	소방시설 계획표	각종 설치시설에 대한 계획표
도면	도면 목록표
	계통도	전력 계통도
		소방 계통도
	평면도	소방 평면도
	상세도	조명기구의 선정

마) 토 목

종 류		내 용
일반사항	설계 설명서
도면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종․횡 단면도
	포장계획 평․단면도
	우․오수배수처리 평․종단면도
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치

바) 조경공사

종 류		내 용
일반 사항	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도
	식재 평면도
	단면도

③ 실시설계의 도서내용

가) 건 축

종 류		축 적
일반 사항	공사 시방서
	설개 개요
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반 도면	표지
	도면 목록표
	안내도
	구적도
	지적도
	면적 산출표
	대지 종․횡단면도
	배치도	1/100이상
	주차 계획도	1/100이상
	평면도	1/100이상
	입면도(2면 이상)	1/100이상
	단면도(종․횡단면도 등)	1/100이상
	실내벽 및 반자의 마감도	1/100이상

종 류			축 적
상세 도면	수직 동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50
		계단 평․단면상세도	1/5～1/50
		승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50

종 류			축 적
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50
		발코니 상세도	1/5～1/50
		출입구 상세도	1/5～1/50
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50
		창호 평면도	1/5～1/50
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100
	특수분야 도면	소음․방진, 무대․조명, 주방, 음향, 전시, 미술장식품 등

나) 구 조

종 류		축 적
일반 사항	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)
	시방서
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	구조 평면도	1/30～1/200
	구조 단면도	1/30～1/200
	기초일람표	1/30～1/100
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도	1/30～1/100
	기둥 일람표	1/30～1/100
	보 일람표	1/30～1/100
	슬래브 일람표	1/30～1/100
	옹벽 일람표	1/30～1/100
	계단배근 일람표	1/30～1/100
	잡배근 일람표	1/30～1/100
	주심도	1/30～1/200

종 류			축 적
상세 도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50
		경사로 상세도	1/30～1/50
		코아 상세도	1/30～1/50
	접합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50
		보접합 상세도	1/5～1/50
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50

다) 기 계

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성
	부하계산서	설계기준에 따라 세부 부하 계산
	설계설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리
도면	도면목록표	도면목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비일람표	주요장비의 사항을 알아보기쉽도록 표기
	옥외배관 평면도	옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리등의 인입, 인출과 관경 및 위치등을 표시	1/100이상
	각 설비계통도	각 설비별 계통 표시
	각 설비평면도	공조, 환기, 위생, 소화설비등에 대한 내용등을 표시	1/100이상

라) 전 기

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기

도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상

마) 토 목

종 류		내 용	축 적
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성
도면	주요 평면도		필요축적
	대지종․횡단면도		필요축적
	토공사평․단면도		1/5～1/100
	흙막이상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5～1/50
	옹벽 평․단면 전개도		1/5～1/100
	옹벽상세도		1/5～1/100
	지하매설 구조물 현황

바) 조 경

종 류		내 용	축 적
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상
		포장계획 평면도	1/100이상
		시설물 평면도	1/100이상
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

마. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

바. 기타 발주자가 요구하는 성과품

〔붙임 1〕보안 서약서/확약서

보안 서약서(대표자용)

본인은 2018년   월   일부로                               설계용역 관련 사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인과 소속업체         는 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인과 소속업체         가 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인과 소속업체         가 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

2018 년    월    일

서  약  자        업   체   명 :                    직     위 :

(업체 대표)        성        명 :                         (서명)

연   락   처 :

서약집행자        소        속 :                     직    위 :

(담당공무원)       성         명 :                         (서명)

연   락   처 :

개인정보 수집․이용 동의여부

■동의함     □동의하지 않음

[ 개인정보 수집·이용에 대한 안내 ]
수집․이용 목적	정보화 용역사업 참여자에 대한 보안서약
수집․이용 항목	소속(직위), 성명, 연락처
보유․이용 기간	수집․이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시
동의하지 않을 경우의 처리	용역사업 참여 불가
개인정보 수집․이용 동의여부	위와 같이 개인정보를 수집․이용하는 것에 동의

보안 서약서(사업참여자용)

본인은 2018년    월   일부로                     설계용역 관련 사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은                       설계용역 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

2018년    월    일

서  약  자        업   체   명 :               직     위 :

성        명 :                        (서명)

연   락   처 :

서약집행자        소        속 :                직    위 :

(담당공무원)       성         명 :                        (서명)

연   락   처 :

개인정보 수집․이용 동의여부

■동의함     □동의하지 않음

[ 개인정보 수집·이용에 대한 안내 ]
수집․이용 목적	정보화 용역사업 참여자에 대한 보안서약
수집․이용 항목	소속(직급·위), 성명, 연락처
보유․이용 기간	수집․이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시
동의하지 않을 경우의 처리	용역사업 참여 불가
개인정보 수집․이용 동의여부	위와 같이 개인정보를 수집․이용하는 것에 동의

보안 확약서(대표자용)

본인은 소속업체(         )를 대표하여 본인과 소속업체(         )는 2018년   월   일부터 2018년  월   일까지                    설계용역 관련 사업(업무)을 수행함에 있어 지득한 제반 기밀사항을 사업 종료 후에도 기상청장의 동의 없이 제 3자에게 일체 누설하거나 공개하지 않을 것이며, 또한 사업수행 과정에서 생산된 산출물은 사업 종료 시 담당자에게 제출한 후 PC에 남아 있지 않도록 모두 삭제하였습니다.

본인과 소속업체(       )에서 상기사항을 위반하여 기밀을 누설하거나 산출물을 임의 보유․활용․제공하는 등 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2018년     월    일

서  약  자            업   체   명 :

(업체 대표)            직        위 :

성        명 :                         (서명)

연   락   처 :

개인정보 수집․이용 동의여부

■동의함     □동의하지 않음

[ 개인정보 수집·이용에 대한 안내 ]
수집․이용 목적	정보화 용역사업 참여자에 대한 보안확약
수집․이용 항목	소속(직위), 성명, 연락처
보유․이용 기간	수집․이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시
동의하지 않을 경우의 처리	용역사업 참여 제한
개인정보 수집․이용 동의여부	위와 같이 개인정보를 수집․이용하는 것에 동의

보안 확약서(사업참여자용)

본인은 2018년  월  일부터 2018년  월   일까지                설계용역 관련 사업(업무)을 수행함에 있어 지득한 제반 기밀사항을 사업 종료 후에도 기상청장의 동의 없이 제 3자에게 일체 누설하거나 공개하지 않을 것이며, 또한 사업수행 과정에서 생산된 산출물은 사업 종료 시 담당자에게 제출한 후 PC에 남아 있지 않도록 모두 삭제하였습니다.

본인이 상기사항을 위반하여 기밀을 누설하거나 산출물을 임의 보유․활용․제공하는 등 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2018년     월    일

서  약  자            업   체   명 :

직        위 :

성        명 :                       (서명)

연   락   처 :

개인정보 수집․이용 동의여부

■동의함     □동의하지 않음

[ 개인정보 수집·이용에 대한 안내 ]
수집․이용 목적	정보화 용역사업 참여자에 대한 보안확약
수집․이용 항목	소속(직위), 성명, 연락처
보유․이용 기간	수집․이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시
동의하지 않을 경우의 처리	용역사업 참여 제한
개인정보 수집․이용 동의여부	위와 같이 개인정보를 수집․이용하는 것에 동의

〔붙임 2〕책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명:                             설계용역

2. 계약  금액:

3. 계약  일자: 201 .   .   .

4. 착수  일자: 201 .   .   .

5. 완수예정일: 201 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명:

나. 주        소:

다. 주민등록번호:

라. 기술자격(면허)종별:

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

201 년.   .   .

계 약 자

주    소:

상    호:

대 표 자:                (인)

기상청 귀하

〔붙임 3〕하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명:                           설계용역

2. 계약  금액: ○○○원

3. 계약  일자: 201 .   .   .

4. 착수  일자: 201 .   .   .

5. 완수예정일: 201 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야: (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액:

다. 하도급자

- 주    소:

- 상    호:

- 대 표 자:

- 보유면허:

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소:

상    호:

대 표 자:

기상청 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 기술용역(설계)계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕(계획, 실시)설계 검사원

(계획, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명:                         설계용역

2. 계약금액: ○○○원

3. 계약일자: 201 .   .   .

4. 착수일자: 201 .   .   .

5. 완수예정일: 201 .   .   .

붙      임: 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소:

상    호:

대 표 자:

기상청 귀하

〔붙임 5〕주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명:                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치:

◦용역기간: 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액:

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(201 . . .)	금주예정사항(201 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소:

상    호:

대 표 자:

책임기술자:           (인)

기상청 귀하

〔붙임 6〕월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명:                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치:

◦용역기간: 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액:

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (201 . . . ～ 201 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소:

상    호:

대 표 자:

책임기술자:           (인)

기상청 귀하

〔붙임 7〕대리인 위임장

대리인 위임장
동의자 인적사항
성명(대표자)		상호(법인명)
생년월일 (법인등록번호)		사업자 등록번호
주소	(전화 : )
e-mail 주소		핸드폰 번호
위임의 유형	한정 위임 포괄 위임	* 한정 위임: 당해 민원 종결 시까지만 위임 * 포괄 위임: 당해 민원을 포함하여 당해 허가번호 (신고번호, 인가번호, 승인번호)와 직접 연결되는 모든 후속 민원의 종결 시까지 위임
상기인은 당해 대리인에게 인터넷건축행정시스템(세움터)을 통하여 민원을 작성하고 신청하는 과정에서 모든 권한을 위임함에 동의합니다.
년 월 일 동 의 인 : (서명 또는 인) ○ ○ ○ 사무소(법인) 귀중
※ 당해 대리인은 업무진행을 하는 과정에서 취득한 정보를 본 목적 외에 다른 용도로 사용하지 않겠으며, 이를 위반 시에는 모든 책임을 지겠습니다. 년 월 일 대리인 : (서명 또는 인)